EXTRATO DE ADITIVO
3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 083/2020
(TP 002/2020)
CONTRATADA: TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
- CNPJ n° 01.070.171/0001-50
CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE ALEGRE/ES.
DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo “prazo e valor” no contrato.
DO PREÇO: Será ACRESCIDO ao objeto inicialmente contratado, a título de aditivo, o valor de R$ 51.078,76 (cinquenta e um mil, setenta e oito reais, setenta e seis centavos), equivalente a ≅ 19,34%, conforme documentações acostadas aos autos do Proc. N° 5261 de 27/10/2021 e autorização do Chefe do Poder Executivo.
Assim, a partir do replanilhamento e do presente termo o valor global do contrato será de R$ 315.244,71 (trezentos e quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e um centavos).
DO PRAZO: O Contrato e a execução da obra serão prorrogados por mais 120 (cento e vinte) dias, vigendo, portanto, até o dia 18/03/2022.
DAS FONTES DE RECURSOS: 
011001.154510071.037 – 44905100000 – 19900000000 – Ficha 000124 (Fundo Cidades).
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal